2-3		소비시장 선도 위한 종합 농산물유통센터 건립

추진부서	농업정책과	담 당	농산물마케팅담당 조미선
협조부서	-	전화번호	440-2931
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	완료	추 진 율	100%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 계속

◦ 사 업 비 : 7,000백만원(국비 2,400, 도비 1,080, 군비 3,520)

◦ 사업내용 : 먹거리 통합 조달·공급 시설 구축

- 먹거리통합지원센터 : 선별·소분·포장실, 전처리실. 저온저장실 등

- 기타 시설 및 물류장비 : 위생시설, 전처리·안전성 검사 장비 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	7,000	-	750	5,250	1,000	-	-
국 비	2,400	-	300	2,100	-	-	-
도 비	1,080	-	135	945	-	-	-
군 비	3,520	-	315	2,205	1,000	-	-
기 타

□ 추진실적

◦ 먹거리통합지원센터 건립

- 사업 선정(`22.6월) ⇨ 건축 설계 완료(`23.8월) ⇨ 입찰 공고 및 시공사
선정(`23.10월) ⇨ 계약·착공(`23.12월) ⇨ 완공(`24.11월)

◦ 지역농산물 공공급식에 관한 조례 개정 완료 : 2024. 10월

◦ 공공급식 타시군 시설 운영 선진지 견학 : 2025. 7월

□ 향후 추진계획

◦ 먹거리통합지원센터 BF 인증 용역 : 2025. 3월 ~ 12월

◦ 먹거리통합지원센터 건축물 사용 승인 : 2025. 12월

◦ 먹거리통합지원센터 내부시설 설비 구축 : 2025. 12월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
3