2-9		지속가능한 산림자원 관리 및 고부가가치 임산물산업 육성

추진부서	산림녹지과	담 당	산림조성담당 이도규
협조부서	-	전화번호	440-2425
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	80%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

◦ 사업위치 : 화천군 관내 일원

◦ 사 업 비 : 7,383백만원(국비 3,901, 도비 991, 군비 2,106, 자부담  385)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	7,383		1,235	1,381	1,255	1,039	2,473
국 비	3,901		724	545	643	505	1,484
도 비	991		153	133	161	131	413
군 비	2,106		358	556	348	323	521
기 타	385		-	147	103	80	55

□ 추진실적

◦ 임도설치 5.2km, 군유임산물 매각 201,426천원

◦ 밀원수림 조성 67ha

◦ 더덕·두릅(54임가) → 유기질비료 / 표고(38임가) → 톱밥배지·자목지원

□ 문제점 및 대책

◦ 관내 벌채량 감소에 따른 밀원수 조림 물량 감소

- 벌채허가 현황 : (2024년) 52ha → (2025년) 48ha

※ 전년도 대비 9% 감소

- 밀원수 조림물량 현황 : (2025년) 11ha → (2026년) 5ha

※ 전년도 대비 55% 감소

⇒ 경제림 조성, 큰나무 조림, 내화수림대조성 등 조림수종 선정 시 현지여건에 적합한 밀원수종으로 대체 검토

⇒ 공유림 산림경영계획에 따른 잣나무림 등 군유림 벌채 및 밀원수 조림 확대

⇒ 식목행사 및 산림사업 등에 밀원수 지원 확대 검토

□ 향후 추진계획

◦ 간선임도 설치(신읍리 산205임) / 5.0km : 2026. 12.한

◦ 산불진화임도 설치(신읍리 산46-1) / 3.0km : 2026. 12.한

◦ 지역특화조림(밀원수림) 사업 시행 / 5ha : 2026. 5.한

◦ 고수익임산물 생산지원사업 지속 홍보 및 사업시행 : 2026. 3. ~ 11.

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
				1