③-4		공용실버주택 건립

추진부서	민원봉사실	담 당	주택담당 이범하
협조부서	-	전화번호	440-2474
예산구분	예산	실천목표	임기 후
추진상황	추진 중	추 진 율	35%

관리카드

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2028년

◦ 사 업 비 : 28,045백만원(국 9,300 / 군 13,100 / LH 5,645)

◦ 사업위치 : 사내면 사창리 357-4번지 일원

◦ 사 업 량 : 고령자복지주택 60호 및 사회복지시설 1식

- 1층 : 관리사무소 및 사회복지시설(300평) 등

- 2층 이상 : 주거공간(전용면적 11평 36호 / 13평 24호)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
군 비	13,100	-	-	-	-	2,600	5,300	5,200

※ 사업비(국비) : 국토교통부(직접보조) → 한국토지주택공사(LH)

□ 추진실적

◦ 공공주택사업 선정 : ‘23. 8. 3.

◦ 우선 추진 후보지선정 기본자료 제공(군→LH) : ‘23. 9. 26.

◦ 지방재정투자심사(행안부) : ‘24. 3. 21.

◦ LH 경영투자심사 완료 : ‘25. 5. 15.

◦ 군비부담금 지출 완료 : ’25. 6. 30. ⇒ 2,600백만원(LH 지급)

◦ 기본협약 체결(화천군·LH) : ‘25. 10. 20.

◦ 기본설계 설명회 : ‘25. 11. 28.

◦ 기본설계 및 주택건설사업계획 승인(국토교통부←LH) : ‘25. 12. 30

◦ 실시설계 및 실시협약 체결(화천군·LH) : ‘26. 12월

□ 향후 추진계획

◦ 공사 추진: ‘27. 1월 ~ ‘28. 12월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
-	-	-	3	-