4-1-②		공공주택사업(행복주택)

추진부서	지역경제과	담 당	도시재생담당 박미영
협조부서	-	전화번호	440-2360
예산구분	예산	실천목표	임기 후
추진상황	정상추진	추 진 율	50%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년

◦ 사업위치 : 화천읍 하리 59-6번지(구 화천읍사무소) / 2,099㎡

◦ 사업내용 : LH공공임대주택(통합공공임대) 공급

- 총 12개층(F4~F15) 72세대 / 연면적 6,078.22㎡

- 총 72세대[41㎡(12.4평)형 24호 / 46㎡(13.9평)형 48호]

◦ 사업추진 방식 : LH한국토지주택공사 위·수탁

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	37,187				3,000	7,000	27,187
국 비
도 비
군 비	18,891				3,000	7,000	8,891
기타(LH)	18,296						18,296

□ 추진실적

◦ LH내부절차(경영투자심의 등) 이행 및 용역사 선정 : 2023. 01.

◦ 화천읍사무소 철거 및 부지정리 완료 : 2023. 11.

◦ 실시설계 완료 : 2024. 05.

◦ 세부 위·수탁 협약(화천군↔LH) 체결 : 2024. 09.

◦ 시공사 선정(반도건설 외 2) : 2024. 11.

◦ 공사착공 : 2024. 12. / 실착공 : 2025. 02.

◦ 토목공사 추진(흙막이 공사 및 터파기 등) : 2025. 02. ~ 11

◦ 건축, 기계공사 추진(지하구조물) : 2025. 11. ~ 2026. 03.

□ 향후 추진계획

◦ 건축, 기계공사 추진(지상구조물) : 2026. 03. ~ 2026. 12.

◦ 마감공사 추진 : 2026. 12. ~ 2027. 10.

◦ 공공임대주택 공급 : 2027. 10.

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
2			3