4-4		귀농‧귀촌 청년 정착마을 조성(간동)

추진부서	기획감사실	담 당	재정전략담당 김영식
협조부서	지역경제과, 안전건설과	전화번호	440-2125
예산구분	예산	실천목표	임기 후
추진상황	정상추진	추 진 율	55%

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2028년

◦ 사업위치 : 간동면 간척리 594-1번지 일원

◦ 총사업비 : 15,200백만원(도 12,000, 군 3,200)    ※ 지방소멸대응기금

◦ 사업내용 : 전원 주택단지(대지) [80호 내외] 및 기반시설 조성

- 부지조성, 상하수도, 전기ㆍ통신, 도로 등 기반시설 조성

- 세대당 500㎡ 이내 분양

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계회
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	15,200		1,900	5,600	1,750	2,500	2,500	950
국 비
도 비	12,160		1,900	4,100	1,400	2,000	2,000	760
군 비	3,040			1,500	350	500	500	190
기 타

□ 추진실적

◦ 진입도로 개설공사(도시계획도로개설)

- 진입도로 군관리계획 결정 고시 : ‘24. 10. 8.

- 진입도로 실시계획 인가고시 : ‘25. 6. 4.

- 진입도로 공사 발주 : ‘25. 8. 14. / 준공 : ‘26. 9월

◦ 주거단지 조성사업(지구단위계획)

- 郡관리계획 결정안 입안 : `24. 12월

- 관련부서 및 군의회 의견청취 : ‘24. 12. 3.

- 郡계획위원회 자문회의 : ‘25. 5. 27.

- 道도시계획위원회 심의 의뢰 : ‘25. 12월

□ 향후 추진계획

◦ 주거단지 道도시계획위원회 심의 : `26. 1월

◦ 대지조성 사업계획 승인 및 실시설계완료 : ‘26. `1월

◦ 주거단지 착공 : `26. 2월

◦ 주거단지 분양계획수립 및 홍보 : `26. 9월

◦ 주거단지 분양 : `26. 12월 ~

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
2		2