④-5-1		전원마을 조성(건축)

추진부서	민원봉사실	담 당	건축담당 안현준
협조부서	-	전화번호	440-2471
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	완료	추 진 율	100%

관리카드

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2024년 ~ 2025년

◦ 사 업 비 : 4,350백만원(지방소멸대응기금 3,900 / 군비 450)

◦ 사업위치 : 하남면 거례리 578 / 개발면적 : 4,900㎡

◦ 사 업 량 : 단독주택 10동 신축 및 기반시설 조성

- 단독주택 : 10동 신축(실사용 면적 25평 규모)

- 기반시설 : 부지조성, 단지내 도로(4m), 전기·통신, 가로등 상·하수도(거례리 하수종말처리장, 지방상수도 연결)

◦ 운영방식 : 「신혼부부 임대주택 지원 조례」에 따른 신혼부부 임대주택

◦ 지원대상 : 무주택 신혼부부(부부 모두 49세 이하, 혼인신고 후 7년 이내)

◦ 지원내용

- 임대보증금 및 임대료 90% 지원

- 최초지원 기간은 5년, 입주 후 1자녀 출산 시마다 5년 연장(최대 30년)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계회
		기투자	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	4,350	-	1,000	3,350	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	450	-	-	450	-	-
기 타	3,900	-	1,000	2,900	-	-

□ 추진실적

◦ 거례리 현황측량 완료 : ’23. 11. 21.

◦ 기본계획 수립 : ’23. 11. 27.

◦ 기반조성 실시설계 : ’23. 12. 27. ~ ’24. 6. 14.

◦ (구)거례분교 해체공사 실시설계 : ’24. 5. 7. ~ 6. 20.

◦ 기반시설 조성공사(토목, 전기, 통신) : ’24. 7. 22. ~ 11. 29.

◦ (구)거례분교 해체공사 : ’24. 7. 29. ~ ’24. 8. 14.

◦ 건축신고 완료 : ’24. 11. 12.

◦ 공유재산(취득) 심의 완료 : ‘24. 11. 14.

◦ 공공주택건설 사업계획승인 : ‘24. 12. 16.

◦ 임대주택 신축공사 : ‘25. 3. 11. ~ ‘25. 11. 4.

◦ 입주자 모집 : `25. 7. 21. ~ 8. 1.

◦ 입주자 및 예비입주자 발표 : `25. 9. 30.

◦ 조경공사 : `25. 11. 10. ~ 12. 9.

◦ 입  주 : `25. 12. 1.

□ 향후 추진계획

◦ 준공식 : `25. 12. 10

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
2	1	-	2	-