④-5-2		전원마을 조성(건축)

추진부서	민원봉사실	담 당	건축담당 안현준
협조부서	-	전화번호	440-2471
예산구분	예산	실천목표	임기 후
추진상황	이행 후 계속 추진	추 진 율	10%

관리카드

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2025년 ~ 2026년

◦ 사 업 비 : 8,300백만원(군비 7,600 / 특별교부세 700)

◦ 사업위치 : 사내면 사창리 980-1 외 2필지 / 개발면적 : 1,303.8㎡

◦ 사 업 량 : 공공임대주택(16호 / 실사용 면적 27평)

◦ 운영방식 : 「신혼부부 임대주택 지원 조례」에 따른 신혼부부 임대주택

◦ 지원대상 : 무주택 신혼부부(부부 모두 49세 이하, 혼인신고 후 7년 이내)

◦ 지원내용

- 임대보증금 및 임대료 90% 지원

- 최초지원 기간은 5년, 입주 후 1자녀 출산 시마다 5년 연장(최대 30년)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계회
		기투자	2025년	2026년	임기이후
계	8,300	-	2,300	6,000	-
국 비	700	-	700	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	7,600	-	1,600	6,000	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진실적

◦ 사창리 신혼부부 공공임대주택 건립 계획 수립: ’25. 1. 31.

◦ 공공건축 사전검토(건축위원회 심의 포함) 완료: ’25. 3. 6.

◦ 건축기획 용역 완료 : ’25. 3. 14.

◦ 건축 실시설계용역 : ’25. 4. 22. ~ 12. 17.

◦ 임대주택 신축공사 : ’26. 3. 1. ~ 12. 31.

◦ 입주자 모집 : `26. 6월

◦ 입  주 : `27. 1월

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
-	-	-	-	-