5		화천군 제2농공단지 조성사업

추진부서	지역경제과	담 당	지역경제담당
협조부서		전화번호	2353
예산구분	예산	실천목표	임기 후
추진상황	정상추진	추 진 율	30%

□ 사업개요

◦ 제2농공단지 및 대체비행장시설 조성

- 제2농공단지 (상·하수도, 전기ㆍ통신, 도로 등 기반시설 조성)

- 대체비행장시설 (활주로, 계류장, 신병교육훈련시설 등)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계회
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	26,700	3,000	1,000	1,000	1,700	-	20,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	16,700	3,000	1,000	1,000	-	-	11,700	-
기 타	10,000	-	-	-	1,700	-	8,300	-

□ 추진실적

◦ 기부 대 양여사업 합의각서 체결 : 2022. 2. 9.

◦ 농공단지 실시계획 수립 용역 발주 : 2022. 6. 7.

◦ 사유지 매입 완료 : 2023. 9. 11.

◦ 대체비행시설 설계(안) 최종 합의 : 2024. 7. 3.

◦ 사창리 비행장 실시설계 30%(안) 사전 검토 : 2024. 12. 3.

◦ 국방시설 및 농공단지 사업승인을 위한 제반 용역 추진 중

◦ 기부 대 양여사업 사업비 균형조정 협의 중

- 국무조정실 행정협의조정위원회 신청 : ‘25. 12월

□ 문제점 및 대책

◦ 실시설계 30%진행 중 국방부 조건변경(표고상승)에 따른 대체비행장 공사비 과다소요 예상으로, 기부 대 양여사업 사업비 균형조정 협의 중

□ 향후 추진계획

◦ 기부 대 양여사업 사업비 균형 조정 합의 후 추진

- 산업단지(농공) 지정 및 군사시설(대체 비행장) 사업계획 승인에

필요한 제반 용역사항 추진

- 산업단지(농공) 지정계획 승인 신청

- 군사시설 사업계획 승인 신청

□ 군민 소통실적

(단위 : 건)

주민간담회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론․방송보도	기타
		1	10