4-5		전원마을(체류형 임대주택) 조성

추진부서	민원봉사실	담 당	건축담당 이범하
협조부서	-	전화번호	440-2471
예산구분	예산	실천목표	임기 내
추진상황	정상추진	추 진 율	20%

□ 사업개요

◦ 위    치 : 하남면 거례리 578 / 개발면적 : 4,900㎡(1,472평)

◦ 사 업 량 : 단독주택 10동 신축 및 기반시설 조성

- 단독주택 : 10동 신축(25평 규모)

- 기반시설 : 부지조성(80평~112평), 단지내 도로(4m),전기·통신,가로등 상·하수도(거례리 하수종말처리장, 지방상수도 연결)

◦ 운영방식 :「공공주택 특별법」에 따른 신혼부부 대상 임대

◦ 지원대상 : 무주택 신혼부부(부부 모두 49세 이하, 혼인신고 후 7년 이내)

◦ 지원내용

- 임대보증금 및 임대료 90% 지원 또는 감면

- 최초지원 기간은 5년, 입주 후 1자녀 출산 시마다 5년 연장(최대30년)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자 실적 및 계획
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기이후
계	3,500	-	-	-	1,000	2,500	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	3,500	-	-	-	1,000	2,500	-	-

□ 추진실적

◦ (구)거례분교 해체공사 : `24. 7. 29~`24. 8. 14.

◦ 기반시설 조성공사(토목, 전기, 통신) : `24. 7. 22~`24. 11. 29.

◦ 건축공사 입찰공고 : `25. 1. 7~`25. 1. 15.

□ 문제점 및 대책

◦ 공사금액 4억 예산 부족

◦ ‘25년 1회 추경에 예산 반영

□ 향후 추진계획

◦ 임대주택 신축공사 : `25. 3월 ~ `25. 11월

◦ 입주자 모집 : `25. 5월

◦ 입  주 : `25. 11월