10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

DMZ 평화의 길 조성

담당자

기획감사실 이승진

(☎440-2036)

□ 사업목적 및 필요성

○ DMZ가 가지고 있는 생태‧역사‧문화자원을 활용한 ‘도보 여행길’ 조성을 통해 안보관광자원 창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위 치 : 화천군 일원(실내고개‧만산동‧산소길‧평화누리길‧평화의댐)

- 사내면 명월리 ~ 상서면 구운‧장촌‧신대리 ~ 화천읍 대이‧풍산‧동촌리

○ 규 모 : 도보여행길 조성, 거점센터 리모델링 등

- 주노선 57km(실내고개~산소길~평화의댐), 테마노선 39km(북진로~오작교~백암산)

- 거점센터 : 풍차펜션 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,857백만원(국비2,000, 도비257, 군비600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,857	6	770	2,081
국 비	2,000	4	696	1,300
시 도 비	257	2	64	191
시군구비	600	-	10	590
지 방 채	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 7‧21사단 업무협약 체결 : ‘20. 7‧9월

○ DMZ 평화의 길 거점센터 설계용역 착수 : ‘20. 12월 / 완료 : ’21. 6월

○ DMZ 평화의 길 조성 설계용역 착수 : ‘20. 12월 / 용역중지

* ASF 및 코로나19로 인한 용역중지

□ 향후계획

○ DMZ 평화의 길 거점센터 리모델링공사 완료 : ‘22. 8월

○ DMZ 평화의 길 조성 설계용역 완료 : ‘22. 5월

○ DMZ 평화의 길 조성공사 시행 : ‘22. 3월 ~ 12월

사업명

화천복합커뮤니티센터건립사업

담당자

교육복지과 김남석(440-2167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 접경지역의 문화‧복지시설 확충 및 거점공간 마련으로 인구감소 대응

○ 복합시설로써 지역경제 활성화, 온종일 돌봄기능, 일자리, 주민 소통 및 문화공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2. ~ 2022. 10.

○ 위 치 : 화천군 화천읍 아리 211-2 (화천초등학교 內 수영장 부지 2,100㎡)

○ 규 모 : 연면적 5,135㎡  / 지하1층, 지상4층 (교육연구시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,800	4,809	5,010	7,981
국 비	11,600	4,375	3,816	3,409
시 도 비	350	0	350	0
시군구비	5,850	434	844	4,572
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69.04%)

○ 사업부지 무상사용 협약(화천군, 강원도교육청) : ‘19. 2. 28.

○ 주민공청회 : ‘19. 8. 16.

○ 기본 및 실시설계용역 : ‘19. 9. 18. ~ ’20. 11. 17.

○ 건축인허가 : ‘20. 11. 02.

○ 공사착공 : ‘20. 11. 23.

□ 향후계획

○ 건축공사 준공 : 2022. 10월한

○ 내부 인테리어 공사 별도 추진 : 2022. 10월 ~ 2023. 2월

○ 2023. 3월 온종일 돌봄 운영

□ 사업변경 내역

구 분	사업비(백만원)		변경사유
	당초	변경
화천복합커뮤니티센터 건립사업	14,300	17,800	돌봄시설을 위한 공간 확장

사업명

화천 문화원 건립

담당자

문화체육과 홍성덕

(☎440-2258)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화원 사무국과 회원단체 사무실의 이전· 재구성을 통한 문화원 고유의

지역 문화계발 및 문화진흥 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘19. 11월 ~ ’21. 12월

○ 위 치 : 화천군 하남면 용암리 1015

○ 규 모 : 지상 3층(연면적 1,678.97㎡, 약507평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,270백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3371	3371	3,371	227
시 도 비	572	572	572	-
시군구비	2264	2264	2,471	227
기타(균형발전특별회계	1678	1678	1678	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ BF(장애물 없는 생활환경)인증 진행 중 (2022.1.7.신청접수)

□ 향후계획

○ 문화원 신축에 따른 집기류 구입 비치 : 2022. 3월한

○ 장애인 편의시설 실내‧외 보강 : 2022. 4월한

○ 주변 조경 식재 공사 : 2022. 5월한

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

화천 반다비 체육센터 건립

담당자

문화체육과 김영근(☎440-2256)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반다비 체육센터를 건립하여 장애인의 재활 및 건강증진은 물론, 비장애인도 함께 체육시설을 이용함으로서 생활체육 서비스 사각지대 해소 및 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘20. 1월 ~ ’23. 12월

○ 위 치 : 간동면 유촌리 179번지 일원

○ 규 모 : 장애인형 국민체육센터 및 작은도서관 (연면적=2,142.1㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,264백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비	5,112		226	1,638	3,248
시 도 비
시군구비	3,152				3,152
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 부지조성공사 완료 : ‘22. 7. 13.

○ 실시설계용역 진행 중(건축협의 완료)

□ 향후계획

○ 실시설계용역 완료(계약심사 및 일상감사 포함) : ‘22. 9월

○ 공사 진행 : ‘22. 10월 ~ ’23. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경
사 업 명	화천 반다비 행복센터 건립	화천 반다비 체육센터 건립
위 치	간동면 유촌리 175번지 (간동 생활체육공원 내)	간동면 유촌리 179번지 (간동 생활체육공원 내)
사업규모	연면적 2,482㎡	2,072.,81㎡(감16.5%)
사업기간	‘20. 1월 ~ ’22. 12월	‘20. 1월 ~ ’23. 12월

사업명

화천생활실내체육관 조성사업

담당자

문화체육과 김택(☎440-2540)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 부족한 체육시설을 확충하고, 기상조건으로 인해 생활체육시설을 활용하지 못하는 상황을 방지하여 주민들의 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘21. 4월 ~ ’23. 11월

○ 위 치 : 화천읍 아리 87-13번지 일원

○ 규 모 : 생활실내체육관 건립 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	12,000		196	889	8,915
국 비	5,940	-	196	889	4,855
시 도 비
시군구비	4,060	-	-	-	4,060
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 실시설계 착수 : ‘21. 8. 24.

○ 실시설계 중간보고 완료 : ‘22. 2. 28.

○ 소규모 환경영향평가 용역 준공 : ‘22. 7. 15.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 완료 : ‘22. 10월

○ 공사 진행 : ‘22. 11월 ~ ’23. 11월

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업비	80억	120억
※ 최근 원자재 가격상승에 따른 사업비 증가

사업명

주거지 주차장 조성사업

담당자

지역경제과 정수원(☎2367)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거지역의 열악한 주차시설 개선 및 주면 전통시장 등 사업지역 주차난 해소

○ 출산, 육아, 다문화를 포괄하는 복합 센터 조성을 통한 가족 교류·소통의 장을 제공하여 주민복지 증진 및 저출산 문제대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년 5월

○ 위 치 : 화천읍 하리 45-1번지 일원

○ 규 모 : 연면적 5,720.5㎡(지하1층, 지상 5층) / 부지 1,450㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원(국 3,900 군 5,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,000	-	-	5,000	4,000
국 비	3,900	-	-	2,000	1,900
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,100	-	-	3,000	2,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계 완료 : 2022. 3 .31.

○ 공사 착공(건축, 토목, 전기, 소방, 기계, 통신) : 2022. 6. 13.

○ 공사 안전관리계획수립 및 승인 : 2022. 7. 8.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2023. 5월한

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

면단위 LPG배관망 사업

담당자

지역경제과 박미희

(☎033-440-2352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가스 미공급 지역에 LPG배관망을 설치하여 안정적인 가스공급

○ LPG 공급 유통구조 개선으로 지역주민들의 에너지 사용료 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023

○ 위 치 : 간동면 오음리, 사내면 사창리

○ 규 모

- 오음리 : LPG저장탱크 2.45ton 2식 , 공급관 6.613㎞

- 사창리 : LPG저장탱크 26.9ton, 공급관 15.98㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,130	0	730	5,000	12,400
국 비	8,200	0	0	500	7,700
시 도 비	1,000	0	400	600
시군구비	7,450	0	330	3,620	3,500
지 방 채
민간자본	1,480	0	0	280	1,200
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   5%)

○ 중기지방재정계획 반영 : 2019. 6

○ 지방재정 투자심사 완료(강원도) : 2019. 6

○ 면단위 LPG보급사업 기본계획 용역 : 2019. 10

○ 2021 강원도지역균형발전 시범사업 선정(오음리) : 2021. 2

○ 2022 접경권발전지원사업 선정(사창리) : 2021. 12

○ 오음리 LPG배관망 구축사업 착공 : 2022. 6

○ 사내면 LPG배관망 구축사업 실시설계 : 2022. 4 ~ 12

□ 향후계획

○ 오음리 LPG배관망 구축사업 준공 : 2022. 11

○ 사내면 LPG배관망 구축사업 착공 : 2023. 3

사업명

화천군 친환경에너지타운 조성사업

담당자

환경과 오광모

(☎033-440-2338)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환경기초시설인 폐기물처리시설에서 생산되는 에너지를 활용하여 주민이       참여하는 수익사업을 추진하고, 그 수익을 주민이 공유함으로써 지역주민의       소득 증대 및 복지 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 상서면 다목2리 마을

○ 규 모 : 친환경 에너지타운 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,376백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,375.9	339.3	594.6	422.5	5,019.5
국 비	2,996	100	175	325	2,396
시 도 비	899	30	52.5	97.5	719
시군구비	2,480.9	209.3	367.1		1,904.5
지 방 채
민간자본
기 타

※ 토지 보상비 포함 (군비 383.9백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14.6%)

○ 사업부지 매입 완료 : 4필지 / 383,907,090원

○ 사업 타당성조사 완료 :‘20. 12월

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 :‘21. 8월 ~‘22. 11월(예정)

□ 향후계획

○ 시설공사 착공 :‘22. 12월 예정

○ 시설공사 준공 :‘23. 12월 예정

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

대이~구만 간 출렁다리 설치사업

담당자

안전건설과 김태훈(☎440-2458)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화천읍 대이리~간동면 구만리를 연결하는 교량을 설치하여 도보트래킹

및 자전거도로를 연결하여 지역 관광자원 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 화천읍 대이리 ~ 간동면 구만리 일원

○ 규 모 : 인도교 설치(L=290.0m, B=3.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,305백만원(도비 3,705, 군비 4,600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,305	610	7,695	-	-
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	3,705	610	3,095	-	-
시군구비	4,600	-	4,600	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 착공 : ‘20. 12. 10.

○ 교량 교각, 교대 설치 완료 : ‘21. 6. 26.

○ 교량 상부공(강관거더, 주탑, 케이블) 완료 : ‘21. 8. 30.

○ 데크, 강화유리, 난간 등 부대시설 설치 : ‘21. 10. 29.

○ 공사 준공 : ‘21. 12. 21.

사업명

동서녹색평화도로(새덕이지구)개설공사

담당자

안전건설과 김태훈(☎440-2458)

□ 사업목적 및 필요성

○ 접경지역 동서관통 순환도로 인프라구축 및 지역균형발전 촉진

○ 평화누리길, 백암산특구, 평화의 댐을 연계한 유기적 교통축 형성을 통한

관광코스 개발로 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2021

○ 위 치 : 화천읍 신읍리 ~ 풍산리 일원

○ 규 모 : 도로선형개량 L=1.1km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원(국비 2,100, 군비 900)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	1,484	1,516	-	-
국 비	2,100	1,458	642	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	900	26	874	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 착공 : ‘20. 4. 29.

○ 공사 재착공 : ‘21. 3. 8.

※ 동절기 공사 일시중지(‘20. 12. 15. ~ 21. 3. 7.)

○ 공사 준공 : ‘21. 10. 12.

사업명

농산물 창업교육센터 및 다목적 교육관 신축

담당자

농업진흥과 박석환(☎440-2951)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방화 시대에 부응한 지역특화 농산물의 가공 창업교육센터를 구축하고

농업인의 전문교육을 수행하는 농업기술개발 보급의 전진기지로 조성하여

통합 농업기술센터를 완성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3 ~2021. 12

○ 위 치 : 화천군 상서면 신풍리 810번지 일대

○ 규 모 : 990㎡(총 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,300	114.5	1,756	1,429.5	-
국 비	1,000	17	626	357	-
시 도 비					-
시군구비	1,520	8.5	915	596.5	-
지 방 채					-
민간자본					-
기 타	780	89	215	476	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 창업교육센터 설치공사 계약 : 2021. 3. 9.

○ 창업교육센터 설치공사 착공 2021. 3. 22.

○ 건축 준공 : ‘21. 12. 22.

○ 전기, 통신 준공 : ‘21. 12. 24.

○ 기계 준공 : ‘21. 12. 28.

○ 소방 준공 : ‘22. 01. 12.

□ 향후계획

○ 보강 및 추가공사 실시 : 2022. 3~12

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음