사업명

화천 복합커뮤니티센터 건립사업

담당자

교육복지과 / 김남석

(440-2167)

□ 사업목적

○ 접경지역의 문화‧복지시설 확충 및 거점공간 마련으로 인구감소 대응

○ 복합시설로써 지역경제 활성화, 돌봄기능, 일자리, 소통 및 문화공간 조성

※아동 및 초등 저학년의 방과후 돌봄시설과 주민들의 교육, 문화활동 공간

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 10.

○ 위 치 : 강원도 화천군 화천읍 아리211-2번지(화천초등학교 내)

○ 규 모 : 복합커뮤니티센터 조성 1식(연면적 5,135㎡ / 지하1층, 지상4층)

○ 사업비 : 178억원(균특 108, 특교 8, 조 3.5, 군 58.5) ※3개사업 복합화

※ 복합커뮤니티센터(178억) = ❶복합커뮤니티센터(135억) + ❷돌봄키즈센터(35억) + ❸공동돌봄센터(8억)

□ 추진상황 및 계획

○ 기본 및 실시설계용역[완료/‘20.6월], 행정절차[완료/’20.10월]

○ 착공[‘20. 11. 02.]→ 지열공사 및 지하 터파기, 가시설공사[완료/‘21. 6.03.]

○ 공정별 사업추진 및 준공 : 2022. 10월중

○ 내부 인테리어공사 별도 추진 : 2022. 10월 ~ 2023. 2월

□ 사업효과

○ 접경지역의 문화‧복지시설 확충 및 거점공간 마련으로 인구감소 대응

○ 복합시설로써 지역경제 활성화, 돌봄기능, 일자리, 소통 및 문화공간 제공

□ 준공전경(조감도)

사업명

화천 평화.생태특구 조성사업

담당자

관광정책과 / 담당자 정진환

(440-2709)

□ 사업목적

○ 세계 유일 DMZ 청정자연을 활용한 평화.생태.안보관광 메카 조성

○ 테마형 관광자원 개발을 통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006년 ~ 2021년

○ 위    치 : 화천읍 풍산리 산269번지 일원

○ 사 업 량 : 백암산 로프웨이 L=2.12km, 생태관찰학습원, 파로호 선착장

○ 사 업 비 : 37,181백만원(국 10,216 / 도 3,365 / 군 23,600)

□ 추진상황 및 계획

○ 공사 착공 : 2012. 6월 (실착공일 : 2014. 3월)

○ 화물삭도 설치 완료 : 2014. 7월

○ 인력삭도 설치 완료 : 2015. 9월

○ 하부승강장 설치 완료 : 2016. 4월

○ 파로호 선착장 정비 완료 : 2017. 6월

○ 철탑 4개소 설치 완료 : 2017. 11월

○ 전망대 및 군사시설 설치 완료 : 2021. 8월

○ 상부승강장 및 로프웨이 설치 완료 : 2021. 10월

□ 사업효과

○ 신성장 원동력제공과 테마형 관광자원 개발로 지역경제 활성화

□ 공사 사진

사업명	대이~구만 간 출렁다리 설치사업	담당자	안전건설과 / 담당자 김태훈 (440-2458)
□ 사업목적 ○ 대이~구만 간 교량 설치하여 단절된 도로 교통시설 확보 및 인근지역 관광자원 활성화 ○ 교량 설치로 화천의 지역상징성 제고 및 화천 관광의 랜드마크 예상 □ 사업개요 ○ 사 업 명 : 대이~구만 간 출렁다리 설치사업 ○ 위 치 : 화천읍 대이리 ~ 간동면 구만리 일원 ○ 사업기간 : ‘19년 ~ ’21년 ○ 사 업 량 : 인도교 설치 (L=290m, B=3m) ○ 사 업 비 : 8,305백만원(도 3,705, 군 4,600) □ 추진상황 및 계획 ○ 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 공법 선정 : ‘20. 6. 11. ○ 공사 착공 : ‘20. 12. 10. ○ 교량 교각, 교대 설치 완료 : ‘21. 6. 26. ○ 교량 상부공(강관거더, 주탑, 케이블) 완료 : ‘21. 8. 30. ○ 데크, 강화유리, 난간 등 부대시설 설치 : ‘21. 10. 29. ○ 공사 준공 : ‘21. 12. 21. □ 사업효과 ○ 단절된 도로 교통시설 확보 및 인근 지역 관광자원 활성화 ○ 교량 설치로 화천의 지역상징성 제고 및 화천 관광의 랜드마크 예상

사업명	동서녹색평화도로(새덕이지구)개설공사	담당자	안전건설과 / 담당자 김태훈 (440-2458)
□ 사업목적 ○ 접경지역 동서관통 순환도로 인프라 구축 및 지역 균형발전 촉진 ○ 급경사 굴곡부, 선형불량구간 개선을 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 □ 사업개요 ○ 사 업 명 : 동서녹색평화도로(새덕이지구)개설공사 ○ 위 치 : 화천읍 신읍리 ~ 풍산리 일원 ○ 사업기간 : ‘19년 ~ ’21년 ○ 사 업 량 : 도로 선형개량 L=1.1km ○ 사 업 비 : 3,000백만원(국 2,100, 군 900) □ 추진상황 및 계획 ○ 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 공사 착공 : ‘20. 4. 29. ○ 공사 재착공 : ‘21. 3. 8. ※ 동절기 공사 일시중지(‘20. 12. 15. ~ 21. 3. 7.) ○ 공사 준공 : ‘21. 10. 12. □ 사업효과 ○ 접경지역 동서관통 순환도로 인프라 구축 및 지역 균형발전 촉진 ○ 급경사 굴곡부, 선형불량구간 개선을 통한 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

사업명	화천 생활실내체육관 조성사업	담당자	문화체육과 / 담당자 김택 (440-2540)
□ 사업목적 ○ 지역 내 부족한 체육시설을 확충하고, 기상조건으로 인해 생활체육시설을 활용하지 못하는 상황을 방지하여 주민들의 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여 □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 ○ 사업위치 : 화천읍 아리 87-13번지 일원 ○ 사업내용 : 생활실내체육관 건립 1식 ○ 총사업비 : 12,000백만원 (국비 5,940, 군비 4,060) □ 추진상황 및 계획 ○ 실시설계 착수 : ‘21. 8. 24. ○ 실시설계 중간보고 완료 : ‘22. 2월 예정 ○ 소규모 환경영향평가 용역 준공 : ‘22. 7월 예정 □ 사업효과 ○ 지역 내 부족한 체육시설을 확충하고, 기상조건으로 인해 생활체육시설을 활용하지 못하는 상황을 방지하여 주민들의 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여

사업명	주거지 주차장 조성사업	담당자	지역경제과 / 담당자 정수원 (440-2367)
□ 사업목적 ○ 주거지역의 열악한 주차시설 개선 및 주면 전통시장 등 사업지역 주차난 해소 ○ 출산, 육아, 다문화를 포괄하는 복합 센터 조성을 통한 가족 교류·소통의 장을 제공하여 주민복지 증진 및 저출산 문제대응 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년 5월 ○ 위 치 : 화천읍 하리 45-1번지 일원 ○ 규 모 : 연면적 5,720.5㎡(지하1층, 지상 5층) / 부지 1,450㎡ ○ 총사업비 : 9,000백만원(국 3,900 군 5,100) □ 추진상황 및 계획 ○ 기본 및 실시설계 완료 : 2022. 3 .31. ○ 공사 착공(건축, 토목, 전기, 소방, 기계, 통신) : 2022. 6. 13. ○ 공사 안전관리계획수립 및 승인 : 2022. 7. 8. ○ 공사 준공 : 2023. 5월한 □ 사업효과 ○ 주거지역의 열악한 주차시설 개선 및 주면 전통시장 등 사업지역 주차난 해소 ○ 출산, 육아, 다문화를 포괄하는 복합 센터 조성을 통한 가족 교류·소통의 장을 제공하여 주민복지 증진 및 저출산 문제대응