109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 화천군에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2022년	2024년 이후
통합공공임대 아파트 건립	12,000	-	-	3,500	8,500	2025	2022	0%
화천 복합커뮤니티센터 건립	22,310	9,819	5,282	7,209	-	2023년	2019년	95%
화천형 교육캠퍼스 구축사업	6,300	3,200	-	3,100	-	2024년	2022년	5%
친환경에너지타운 조성사업	6,352	550	0	2,028	3,774	2024	2020	15
화천군 자원회수센터 설치사업	5,925	0	0	274	5,651	2025	2022	0
화천반다비 체육센터 건립	9,264	226	1,632	4,406	3,000	‘24. 4월		30%
화천생활실내 체육관 조성사업	12,000	176	23	5,000	6,801	‘24. 7월		5%
사내골프연습장 조성사업	4,000			2,000	2,000	‘23. 12월		0%
화천댐역사속으로 탐방로조성사업	5,450	-	160	2,090	3,200	2025	2022	10%
2023산천어축제	2,900	-	-	-	2,900	2023	2022	100%
원천농공단지 복합문화센터 건립사업	4,480	0	0	1,000	3,480	2025년	2022년	0%
스마트 복합쉼터 조성사업	3,200	0	0	0	3,200	2025년	2022년	0%
2022 화천 토마토축제	400	-	400	-	600	2022	2022	100
먹거리통합지원센터 건립사업	6,000	-	101	-	5,899	2024	2022	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화천복합커뮤니티센터건립사업

담당자

교육복지과 조용래(☎440-2167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 접경지역의 문화‧복지시설 확충 및 거점공간 마련으로 인구감소 대응

○ 복합시설로써 지역경제 활성화, 온종일 돌봄기능, 일자리, 주민 소통 및 문화공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 화천군 화천읍 아리 211-2 (화천초등학교 內 수영장 부지 2,100㎡)

○ 규 모 : 연면적 5,135㎡  / 지하1층, 지상4층 (교육연구시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,565백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	22,310	9,819	5,282	7,209	-
국 비	11,690	8,191	3,499	0	-
시 도 비	550	350	200	0	-
시군구비	10,070	1,278	1,583	7,209	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 사업부지 무상사용 협약(화천군, 강원도교육청) : ‘19. 2. 28.

○ 기본 및 실시설계용역 : ‘19. 9. 18. ~ ’20. 11. 17.

○ 본공사 : ‘20. 11. 23. ~ ‘23. 08. 30.

○ 인테리어공사 착공 : ‘22. 12. 27. ~ ‘23. 09. 06.

□ 향후계획

○ 내부 인테리어공사 : ‘22. 12. 27. ~ ‘23. 09. 06.

○ 화천복합커뮤니티센터 운영 : ‘23. 09월

□ 사업변경 내역

구 분	사업비(백만원)		변경사유
	당초	변경
화천복합커뮤니티센터 건립사업	14,300	22,565	돌봄시설을 위한 공간 확장 및 추가 인테리어공사

사업명

화천군 자원회수센터 설치 공사

담당자

환경과 이진규(☎440-6203)

□ 사업목적 및 필요성

○ 효율적인 분리작업으로 자원재활용률을 향상시키고 지속 가능한 자원순환형       사회기반을 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 기간 : 2023년 ~ 2025년

○ 위치 : 화천군 하남면 논미리 66-6번지 일원

○ 규모 : 재활용 가능자원 선별·처리량 15톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,925백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,925	0	0	274	5,651
국 비	1,778	0	0	82	1,696
시 도 비	1,245	0	0	58	1,187
시군구비	2,902	0	0	134	2,768
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ `23. 11월 : 기본 및 실시설계 착수

○ `24. 03월 : 시설공사 착공

○ `25. 02월 : 시설공사 준공

□ 향후계획

○ 기존 재활용선별장 철거 용역 진행예정이며, 철거 용역 발주 완료 후 설치       공사 실시설계용역 발주 예정

□ 사업변경 내역 (해당없음)

사업명

화천 반다비 체육센터 건립

담당자

문화체육과 유세경(☎440-2256)

□ 사업목적 및 필요성

○ 간동면 일원에 “누구나, 언제든지” 사용 가능한 실내 문화체육시설을 건립       하여 주민이 누릴 수 있는 생활체육복지 서비스 품격 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘20. 1월 ~ ’24. 4월

○ 위    치 : 간동면 유촌리 179번지 일원(부지면적 : 15,685.01㎡)

○ 규    모 : 장애인형 국민체육센터 및 작은도서관 (연면적 : 2,142.1㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,264백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,264	226	1,632	4,406
국 비	1,112	-	-	1,112
시 도 비	-
시군구비	3,152	-	-	152	3,000
지 방 채
민간자본
기 타	5,000	226	1,632	3,142

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 건축협의 완료 : ‘22. 6. 14.

○ 부지조성공사 완료 : ‘22. 7. 13.

○ 기본 및 실시설계 완료 : ‘22. 11. 13.

○ 공사착공 : ‘23. 3. 6.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : ‘24. 4월 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경
사 업 명	화천 반다비 행복센터 건립	화천 반다비 체육센터 건립
위 치	간동면 유촌리 175번지 (간동 생활체육공원 내)	간동면 유촌리 179번지 (간동 생활체육공원 내)
사업규모	연면적 2,482㎡	2,142.1㎡(감14.7%)
사업기간	‘20. 1월 ~ ’22. 12월	‘20. 1월 ~ ’24. 4월

사업명

화천생활실내체육관 조성사업

담당자

문화체육과 김 택(☎440-2540)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 부족한 체육시설을 확충하고, 기상조건으로 인해 생활체육시설을 활용하지 못하는 상황을 방지하여 주민들의 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘21. 4월 ~ ’24. 7월

○ 위 치 : 화천읍 아리 87-13번지 일원

○ 규 모 : 생활실내체육관 건립 1식 (연면적 : 3,685㎡)

테니스장 3면, 풋살,족구장 겸용 1면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,000	176	23	5,000	6,801
국 비	5,940	176	23	4,000	1,741
시 도 비
시군구비	6,060	-	-	1,000	5,060
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역 착수 : ‘21. 8월

○ 건축협의 완료 : ‘23. 2월

○ 일상감사 및 계약심사 완료 : ‘23. 6월

○ 실시설계용역 준공 : 2023. 7월

○ 공종별 계약의뢰 : 2023. 7. 14.

□ 향후계획

○ 공사 진행 : ‘23. 8월 ~ ’24. 7월

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경
사업비	80억	120억
※ 최근 원자재 가격상승에 따른 사업비 증가

사업명

화천댐역사속으로 탐방로 조성사업

담당자

관광정책과 이창수(☎440-2542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국전쟁의 역사를 간직한 화천댐을 개방하고 파로호와 청정 자연을 연계한       관광자원으로 개발하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2025

○ 위 치 : 파로호 선착장~화천댐

○ 규 모 :

- 1지구(4km)  : 게이트, 데크로드, 전망대 조성 등

- 2지구(435m) : 화천댐 전망공간 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	5,450	-	160	2,090	3,200
국 비
시 도 비	3,380	-	-	1,300	2,080
시군구비	1,910	-	160	790	1,120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 화천댐 개방을 위한 업무협약 체결(한강수력본부↔화천군) : ‘22. 3. 24

○ 투자심사완료 : ‘22. 5. 30

○ 설계 용역 착수 : ‘22. 11. 28

□ 향후계획

○ 각종 인·허가 및 실시설계 완료 : ‘23. 9월한

○ 공사 착공 : ‘23. 9월 ~ ’24. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

2023 화천산천어축제

담당자

관광정책과 이창수(☎440-2542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화천군 브랜드 위상 강화 및 건전한 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. 7 ~ 1. 29

○ 위 치 : 화천천 일원

○ 규 모 : 산천어 얼음 낚시 등 70여종 운영프로그램 준비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	2,900	-	-	-	2,900
국 비
시 도 비
시군구비	2,900	-	-	-	2,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 산천어축제 소규모 환경영향평가 등 축제 준비 : ‘22. 3 ~ 10

○ 축제장 기반시설 조성 : ‘22. 11 ~ 12

○ 2023 산천어축제 운영 : ‘23. 1. 7 ~ 1. 29

□ 향후계획

○ 2024 산천어축제 기반시설 조성 : ‘23. 12월한

○ 2024 산천어축제 운영 : ‘23. 1. 6 ~ 1. 28

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

원천농공단지 복합문화센터 건립사업

담당자

지역경제과 주민지

(☎440-2109)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원천농공단지 내 군 소유 부지를 활용하여 단지 내 전무한 문화, 복지,

편의, 주거공간의 복합문화센터 건립을 통해 근로자 및 지역주민의 복지

환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 5월 ~ 2025년 4월

○ 위 치 : 화천군 하남면 원천리 1146-5번지

○ 규 모 : 지상 3층, 연면적 1,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2022년	2023년 이후
계	4,480	-	-	1,000	3,480
국 비	2,700	-	-	700	2,000
시 도 비	-	-
시군구비	1,780	-	-	300	1,480
지 방 채	-		-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 공유재산 심의 및 지방재정 투자심사 완료 : 2022. 5월

○ 공공건축 기획용역 준공 : 2023. 3월

○ 공공건축심의위원회 심의 완료 : 2023. 4월

○ 설계 공모 발주 : 2023. 8월

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 준공 : 2024. 3월

○ 공사 발주 및 착공 : 2024. 4월

○ 공사 준공 : 2025. 4월

사업명

스마트 복합쉼터 조성사업

담당자

지역경제과 손승민

(☎440-2446)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하남면 원천리 국도 5호선 내 도로 이용객을 위한 쉼터가 전무하여, 이를

조성하여 도로 이용자들의 편의시설 제공 및 지역 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 10월 ~ 2025년 12월

○ 위 치 : 화천군 하남면 원천리 951번지 일원

○ 규 모 : A=8,406㎡(편의점, 로컬식당, 관리사무소 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2022년	2023년 이후
계	3,200	-	-	-	3,200
국 비	2,000	-	-	-	2,000
시 도 비	-	-
시군구비	1,200	-	-	-	1,200
지 방 채	-		-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 국토교통부 공모사업 선정 : 2022. 3. 2.

○ MOU 체결(원주지방국토관리청 – 홍천국토관리사무소 – 화천군) : 2023. 7. 21.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2022. 10. 29.

○ 디자인 및 배치(안) 보고 완료 : 2023. 4.

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 준공 : 2023. 10월

○ 공사 발주 및 착공 : 2023. 12월

○ 공사 준공 : 2025. 12월

사업명

2022 화천토마토축제

담당자

농업정책과 이다혜(☎440-2912)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 지역특산물을 활용한 축제 개최로 지역 관광자원 발굴

◦ 각종 생산 및 소득 유발로 농업, 상업 기반 지역경제 동반 활성화

◦ 민·관·군이 하나 되어 지역융화를 이끌 수 있는 화합의 장 마련

◦ 축제를 통한 지역관광활성화로 농업, 상업 기반 지역경제 동반 활성화

◦ 지역생산 화천 화악산 토마토 및 화천 청정 농특산물 브랜드 이미지 제고와 지역주민의 자긍심 고취

◦ 신규 프로그램 지속 발굴을 통해 체험의 다양성 제공 및 관광객 만족도 향상으로 대한민국 대표 여름축제로 도약

◦ 화천화악산찰토마토, 화천의 농특산물의 우수성과 뛰어난 청정화천의 자연자원 연계는 관광 화천의 위상 제고에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. 5. ~ 8. 7.

○ 위 치 : 화천군 사내면 사창리 문화마을 일원

○ 규 모 : 화천토마토축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비		-	400	-	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 기본계획 수립 및 축제 안전관리계획 수립 및 심의 완료

○ 화천토마토축제 홍보 및 홍보물 제작 배포 완료

○ 축제장 시설물 조성 및 본행사 개최 완료

○ 축제 결과보고회 개최 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 화천군에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 화천군에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.