사업명

친환경에너지타운 조성사업

담당자

환경과 / 반완수

(440-2340)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환경기초시설인 폐기물처리시설에서 생산되는 에너지를 활용하여 주민이

참여하는 수익사업을 추진하고, 그 수익을 주민이 공유함으로써 지역주민의       소득 증대 및 복지 확대

□ 사업개요

○ 기간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위치 : 화천군 상서면 다목2리 마을

○ 규모 : 친환경 에너지타운 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,352백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,352	550	0	2,027.5	3,774.5
국 비	2,996	275	0	900	1,821
시 도 비	899	82.5	0	270	546.5
시군구비	2,457	192.5	0	857.5	1,407
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-

※ 토지 매입비 포함 (군비 360백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 사업 타당성 조사 완료 : ‘20. 12월

○ 기본 및 실시설계 용역 준공 : ‘23. 6월

□ 향후계획

○ 강원특별자치도 계약심사 : ‘23. 8월 ~ 9월

○ 시설공사 착공(준공) : ‘23. 10월(준공 : ’24. 12월)

□ 사업변경 내역 (해당없음)

사업명

먹거리통합지원센터 건립사업

담당자

농업정책과 / 김상덕

(440-4635)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공급식에 대한 지역 농산물의 안정적 생산·소비와 사회적 가치설현 등

지속 가능한 먹거리 선순환 체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 화천군 하남면 원천리 1146-11

○ 규 모 : 지상 2층, 연면적 2,144㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2022년	2023년 이후
계	6,000	0	101	0	5,899
국 비	2,400	-	40	-	2,360
시 도 비	1,080	-	19	-	1,061
시군구비	2,520	-	42	-	2,478
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계 완료 : ‘23.8월

○ 건축 계약심사 완료 및 입찰 공고 : ‘23.10월

□ 향후계획

○ 시공사 선정 및 착공 : ‘23.10월

○ 준공 : ‘24.4월

사업명

화천복합커뮤니티센터건립사업

(사내 교육커뮤니티건립사업)

담당자

교육복지과 / 조용래

(440-2167)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국방개혁 2.0(27사단 해체 등) 및 도심지역 인구유출의 대응방안 마련

○ 사내 교육커뮤니티센터 건립으로 양질의 교육환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024.

○ 위 치 : 사내면 사창리 357-4일원 (6,301㎡)

○ 규 모 : 연면적 1,500㎡  / 지하1층, 지상2층 (교육연구시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	6,300		3,200	3,100	-
국 비	5,000		2,500	2,500	-
시 도 비	0			0	-
시군구비	1,300		700	600	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 지방소멸대응 기금사업 선정 : 2022. 8월

○ 화천형 교육캠퍼스 구축 사업 부지매입 완료 : 2023. 4월

○ 공공건축 계획 사전검토 : 2023. 5월 ~ 9월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 10월 ~ 2024. 3월

○ 착공 및 준공 : 2024. 6월 ~ 2024. 12월

사업명

통합공공임대아파트 건립

담당자

민원봉사실 / 김영근

(440-2469)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회여건 변화에 대응한 안정적 주택공급을 위하여 수요자 중심의 맞춤형 공공임대주택을 건설함으로써, 지방인구소명에 적극 대응하여 관내 인구유입 도모와 관외 인구유출을 방지하고 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 1월 ~ 2025년 6월(2년 6개월)

○ 위 치 : 화천군 화천읍 상리 2-19 외 2필지 일원

○ 규 모 : 통합공공임대아파트 건립 1식(50세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2022년	2023년 이후
계	120,000			3,500	115,000
국 비	90,000			3,500	85,000
시군구비	30,000				30,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 지방재정 투자사업 심사 : ‘22. 9월

□ 향후계획

○ 공유재산 관리계획 수립 : ‘22. 11월

○ 사업대상지 적정성검토 : ‘22. 10 ~ 12월

○ 사업시행자 방식 결 정 및 건축설계 : ‘23. 1 ~　’23. 12월

○ 통합공공임대주택 착공 및 준공 : ‘24. 1 ~ ’25. 6월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

사내골프연습장 조성사업

담당자

문화체육과 김 택(☎440-2540)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 골프연습장 노후화로 이용객의 불편 및 안전문제 발생 우려

○ 주민들의 생활수준 향상 및 골프 대중화로 인한 골프 수요증가에 따라 생활체육기반시설 조성으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023 ~ 2024

○ 위    치 : 사내면 일원(부지선정 검토중)

○ 규    모 : 골프연습장 1동(연면적 900㎡, 지상 2층, 30타석, L=160M)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000		-	2,000	2,000
국 비
시 도 비	2,600	-	-	1,300	1,300
시군구비	1,400		-	700	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 지방재정투사심사 완료 : ‘22. 11월

○ ‘23년 체육진흥시설지원(전환)사업 예산 확보 : ‘23. 4. 28.

○ 사업부지 선정 : ‘23. 9월한

□ 향후계획

○ 공사 착공 : ‘23. 3월 예정

○ 공사 준공 : ‘23. 12월 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명	화천 생활실내체육관 조성사업	담당자	문화체육과 / 담당자 김택 (440-2540)
□ 사업목적 ○ 지역 내 부족한 체육시설을 확충하고, 기상조건으로 인해 생활체육시설을 활용하지 못하는 상황을 방지하여 주민들의 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여 □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년 ○ 사업위치 : 화천읍 아리 87-13번지 일원 ○ 사업내용 : 생활실내체육관 건립 1식 ○ 총사업비 : 12,000백만원 (국비 5,940, 군비 4,060) □ 추진상황 및 계획 ○ 실시설계 착수 : ‘21. 8. 24. ○ 실시설계 중간보고 완료 : ‘22. 2월 예정 ○ 소규모 환경영향평가 용역 준공 : ‘22. 7월 예정 □ 사업효과 ○ 지역 내 부족한 체육시설을 확충하고, 기상조건으로 인해 생활체육시설을 활용하지 못하는 상황을 방지하여 주민들의 건강 증진과 생활체육 활성화에 기여