민선 8기 군수 공약사항 사업별 관리카드

관리번호

②-3

공 약 명

소비시장 선도 위한 종합 농산물유통센터 건립

관리부서

추진부서

농업정책과 먹거리지원T/F담당 김상덕 (☎ 4635)

협조부서

실천목표

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

[임기 내]

1개소

추진상황

정상추진

추 진 율

10%

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022. 11 ~ 계속

❍ 사 업 비 : 7,000백만원(국비 2,400 도비 1,080 군비 3,520)

❍ 사업내용 : 먹거리 통합 조달·공급 시설 구축

- 먹거리통합지원센터 : 선별·소분·포장실, 전처리실. 저온저장실 등

- 기타 시설 및 물류장비 : 위생시설, 전처리·안전성 검사 장비 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위:백만원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		합 계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합 계	7,000	7,000	750	5,250	1,000	0	0	0
국 비	2,400	2,400	300	2,100	-	-	-	-
도 비	1,080	1,080	135	945	-	-	-	-
군 비	3,520	3,520	315	2,205	1,000	-	-	-

□ 추진상황

❍ 먹거리통합지원센터 건립 지원 선정 : 2022. 6. 30.

❍ 건축 기본 및 실시설계 완료(′23.8월) ⇨ 강원도 계약심사 완료(′23.9월)
⇨ 입찰 공고 및 시공사 선정(′23.10월) ⇨ 계약체결 및 착수(′23.11월)

□ 향후계획

❍ 먹거리통합지원센터 건립

- 준공(′24.7월) ⇒ 시범 운영(′24.7~12월) ⇒ 본 운영(′25.1월 ~)

❍ 운영 계획 수립 및 사전 준비

- 운영계획 수립 : ′24. 4월

- 관련 조례 제정 : ′24. 6월

- 농가 재조직화 : ′24. 7월 ~ 12월