민선 8기 군수 공약사항 사업별 관리카드

관리번호

③-4

공 약 명

공용실버주택 건립

관리부서

추진부서

민원봉사실 주택담당 안현준(☎ 2474)

협조부서

실천목표

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

[임기 내]

미착수

사업공모

착공

공사

공사

추진상황

정상추진(공모 선정)

추 진 율

00%

□ 사업개요

❍ 지역사회 주거취약계층 어르신들의 주거공간 확보 및 주거안정 도모를 위한 공동주택(고령자복지주택) 건설

❍ 사 업 량 : 사내면 사창리 60호(전용면적 24㎡/30호, 33㎡/30호)

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위:백만원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		합 계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합 계	22,400	15,680	-	-	4,480	5,600	5,600	6,720
국 비	9,300	6,510	-	-	1,860	2,325	2,325	2,790
군 비	13,100	9,170	-	-	2,620	3,275	3,275	3,930

□ 추진실적

❍ 사업공고 : 2023. 4월

❍ 공모제안 : 2023. 6월

❍ 현장평가 : 2023. 6. 28.

❍ 공모선정 : 2023. 8 3.

❍ 우선추진 후보지선정 기초자료 제출(LH) : 2023. 9. 26.

❍ 중기지방재정 투자심사 완료(행안부) : 2023. 12. 27.

□ 향후계획

❍ 기본 협약체결(화천군&LH) : 2024. 2월

❍ 주택건설사업계획승인 : 2025. 2월

❍ 실시계획 협약체결(화천군&LH) : 2025. 2월

❍ 공사 착공 및 준공 : 2025. 3월 ~ 2027. 12월