민선 8기 군수 공약사항 사업별 관리카드

관리번호

④-1-1

공 약 명

공공주택사업(신읍지구 마을정비형 공공주택 건립)

관리부서

추진부서

민원봉사실  주택담당  안현준 (☎ 2474)

협조부서

실천목표

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

[임기 내]

공사착공

공사

준공(완료)

추진상황

정상추진

추 진 율

58%

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2024년 / 공사기간 : 2022. 5. 18 ~ 2024. 5. 22.(25개월)

❍ 사 업 비 : 17,637백만원(국 14,805 / LH 263.5 / 군 2,568.5)

❍ 사업위치 : 화천읍 신읍리 648-1 일원 / (구)농업기술센터ㆍ보건의료원

❍ 사 업 량 : 신읍리지구 120호(국민임대 100호, 영구임대 20호)

- 전용면적 26㎡/20세대, 29㎡/36세대, 33㎡/36세대, 46㎡/28세대

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위:백만원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		합 계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합 계	17,637	-	-	-	-	-	-
국 비	14,805	-	-	-	-	-	-
군 비	2,568.5	-	-	-	-	-	-
LH	263.5	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

❍ 공사착공 : 2022. 5. 18.

❍ 입주자 모집공고 : 2023. 7. 31. (접수 : ‘23. 8. 21. ~ 25.)

- 영구임대(20호) : 화천군 모집 (접수현황 : 39)

- 국민임대(100호) : LH모집 (접수현황 : 384)

❍ 1동 7층 / 2동 내부마감 공사 진행 중 ※ 전체공정률 : 58%

□ 향후계획

❍ 골조공사 완료 : 2024. 2월한

❍ 공사완료 : 2024. 5. 22.한

❍ 입주자 입주 : 2024. 8. 31.한