민선 8기 군수 공약사항 사업별 관리카드

관리번호

④-1-2

공 약 명

공공주택사업

관리부서

추진부서

지역경제과  도시재생담당  정재희 (☎ 2360)

협조부서

실천목표

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

[임기 내]

사전행정절차

기본 및 실시설계

공사착공

공사준공

운영관리

추진상황

정상추진

추 진 율

10%

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

❍ 사업위치 : 화천읍 하리 59-6번지(현 화천읍사무소) / 1필지, 2,219㎡

❍ 사업내용 : LH공공임대주택(행복주택) 공급 [총 70세대]

- 총 7개층(F4~F10) 70세대 / 연면적 5,858㎡(전용41㎡ 35호, 전용46㎡ 35호)

❍ 사업추진 방식 : LH한국토지주택공사 위․수탁 협약 체결

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위:백만원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		합 계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합 계	16,751	16,751	-	2,513	6,868	7,370	-	-
군 비	3,000	3,000	-	500	1,200	1,300	-	-
기 타	13,751	13,751	-	2,013	5,668	6,070	-	-

□ 추진실적

❍ 화천군 및 LH 기관 협의 : 2021. 3. 6.

❍ 도시재생 총괄사업관리자 업무협약 : 2021. 9월

❍ 도시재생사업 선정(국토부) 및 활성화계획 승인 : 2022. 3. 23.

❍ LH 내부절차(경영투자심의 등) 이행 및 용역사 선정 : 2023. 1월

❍ 행정복지센터 소요 공간 및 주차장 배치계획 수립 : 2023. 5월

❍ 화천읍사무소 철거 및 부지정리 완료 : 2023. 11. 10.

□ 향후계획

❍ 기본 및 실시설계용역, 인허가절차 이행 등 사업계획 수립 : 2024. 2월한

❍ 세부 위․수탁협약 체결(화천군-LH) : 2024. 3월한

❍ 시공사 선정 및 공사추진 : 2024. 6월 ~ 2025. 12월

❍ 공공임대주택(행복주택) 공급(70세대) : 2026. 1월

- 설계변경 검토협의 : 2023. 10. 12.

(70세대 → 72세대 / 전용41㎡ 24호, 전용46㎡ 48호)