민선 8기 군수 공약사항 사업별 관리카드

관리번호

④-4

공 약 명

귀농‧귀촌 청년 정착마을 조성(간동)

관리부서

추진부서

기획감사실  강원특별자치도TF담당  김성복 (☎ 2125)

협조부서

실천목표

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

[임기 내]

기본계획수립

실시설계 추진

착공

준공

추진상황

정상추진

추 진 율

15%

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

❍ 사업위치 : 간동면 간척리 594-1번지 일원 / 109,624㎡

❍ 총사업비 : 15,200백만원(도 12,000, 군 3,200) ※ 지방소멸대응기금

❍ 사업내용 : 전원 주택단지(대지) [70호 내외] 및 기반시설 조성

- 부지조성, 상하수도, 전기ㆍ통신, 도로 등 기반시설 조성

- 세대당 450㎡ 이내 분양, 휴게 편의시설 조성 등

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위:백만원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		합 계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합 계	15,200	15,200	2,375	5,125	1,750	2,975	2,975
도 비	12,000	12,000	1,900	4,100	1,400	2,300	2,300
군 비	3,200	3,200	475	1,025	350	675	675

□ 추진실적

❍ 기본구상 및 기획계획수립 용역 완료 :‘23. 3월

❍ 지구단위계획 수립 및 실시설계 용역 착수 :‘23. 6월

❍ 제반영향평가(환경·재해영향성, 지반조사 등) 용역 착수 :‘23. 9월

□ 향후계획

❍ 지구단위계획 수립 및 실시설계 용역 준공 :‘24. 5월

❍ 진입도로 개설 공사 : ‘24. 5월 ~ 9월

❍ 주거타운 조성 공사 :‘24. 9월 ~ ‘25. 6월

❍ 택지분양 공고 및 계약 :‘24. 10월 ~ 12월