민선 8기 군수 공약사항 사업별 관리카드

관리번호

④-9

공 약 명

전천후 다목적 레저스포츠 공간 조성

관리부서

추진부서

문화체육과  체육시설조성담당  이윤기 (☎ 2252)

협조부서

실천목표

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

[임기 내]

실시설계

공사착공

공사준공

추진상황

정상추진

추 진 율

22%

□ 사업개요

❍ 사업기간 :‘21. 4월 ∼ ‘24. 9월

❍ 사업위치 : 화천읍 아리 87-13번지 일원

❍ 사업내용 : 실내체육관 건립 1식(건축 연면적 3,685㎡)

- 실내 테니스장 3면, 풋살(족구) 겸용구장 1면 조성

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위:백만원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		합 계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합 계	10,240	12,000	7,940	2,300	-	-	-	-
국 비	5,940	5,940	5,940	-	-	-	-	-
도 비	-		-	-	-	-	-	-
군 비	4,300	4,300	2,000	2,300	-	-	-	-
기 타	-		-	-	-			-

□ 추진실적

❍ 실시설계 용역 착수 : ‘21. 8월

❍ 소규모 환경영향평가 용역 : ‘22. 7월

❍ 건축협의 완료 : ‘23. 2월

❍ 일상감사 및 계약심사 완료 : ‘23. 6월

❍ 공사 착공 : ‘23. 8월

❍ 동절기 공사중지 : ‘23. 12월

□ 향후계획

❍ 공사 재개 : ‘24. 3월

❍ 공사 준공 : ‘24. 9월