민선 8기 군수 공약사항 사업별 관리카드

관리번호

⑤-1

공 약 명

화천군 제2농공단지 조성사업

관리부서

추진부서

지역경제과 지역경제담당 김동주 (☎ 2353)

협조부서

실천목표

2022년

2023년

2024년

2025년

2026년

[임기 내]

사전행정절차

기본 및 실시설계

기본 및 실시설계

공사착공

공사준공

추진상황

정상추진

추 진 율

5%

□ 사업개요

❍ 농공단지 및 비행장시설 조성

- 제2농공단지(70,181㎡) : 상·하수도, 전기ㆍ통신, 도로등 기반시설 조성

- 대체비행장시설(86,000㎡) : 활주로, 계류장, 신병교육훈련시설 등

※ 활주로 490m, 계류장 18,900㎡, 훈련시설 2,503㎡

□ 재원투자 실적 및 계획

(단위:백만원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		합 계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합 계	26,700	26,700	4,000	1,000	1,700	12,000	9,000
국 비*	8,000	-	-	-	1,700	3,300	3,000
도 비	-	-	-	-	-	-	-
군 비	18,700	18,700	4,000	1,000	-	7,700	6,000

*국비 : 지방소멸대응기금(기초계정)

□ 추진실적

◦ 기부 대 양여사업 합의각서 체결 :‘22. 2. 9.

◦ 제2농공단지 실시계획 수립 용역 발주 :‘22. 6. 7.

◦ 사유지 매입완료 :‘23. 9. 11.

□ 향후계획

◦ 산업단지(농공) 지정 및 군사시설(대체 비행장) 사업계획 승인에

필요한 용역 추진

- 전략환경영향평가, 재해영향평가, 토양오염정밀조사, 지질조사(지반조사), 문화재지표조사 용역 :‘24. 1월 ~ 12월